АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     14.11.2014                                                                                                   4897                                                                                          
_____________					                                                          №___________

О внесении изменений
в постановление администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
от 12.10.2012 № 4800

	
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 28.10.2014 г. № 88 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.12.2013 г № 89 «о бюджете городского округа город Выкса Нижегородской области на 2014 год»:
    1. Внести в постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 12.10.2012 № 4800 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газоснабжение городского округа город Выкса на 2013-2017 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел  6 «Система программных мероприятий» Программы изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение программы» Программы таблицу  изложить в следующей редакции:

Наименование муниципального
заказчика	Источники 
финансирования	Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. руб.	Всего за период реализации, тыс. руб.	
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		
Администрация городского округа город Выкса	Всего, в том числе	15575,12	46798,48	96690,45	71299,5	19800	250163,56	
	Местный бюджет	13800,52	14036,18	74486,20	71299,5	19800	193422,4	
	Областной бюджет	1774,6	32762,30	22204,25			56741,15	

1.4. Таблицу раздела «8. Индикаторы достижения целей программы» изложить в следующей редакции: 
Наименование   
целевых показателей 
Программы
	Единица измерения   
	2013 год	2014 
год	2015 
год	2016 
год	2017 год	
Протяженность сетей газоснабжения
	км	842,85	867,23	926,32	956,27	965,97	
Количество объектов
	шт	33080	33083	34399	34555	34794	

1.5. Приложение к муниципальной программе «Газоснабжение городского округа город Выкса на 2013-2017 годы» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Начальнику отдела пресс-службы Артемьеву А.В. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного инженера управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа город Выкса     Д.С. Елистратова.

Глава администрации                                                                           В. В. Кочетков

Приложение № 1 к Постановлению
от                                         №_____       
6. Система программных мероприятий	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирова
ния	2013 
год	2014
 год	2015
год	2016 
год	2017 
год	Всего	
1	Строительство газопровода высокого давления р.п. Виля (2 очередь)	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	5818,55	 	 	 	 	5818,55	
2	Строительство газопровода низкого давления р.п. Виля (2 очередь) 	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет

областной бюджет	1106,57

1774,6		 	 	 	2881,17	
3	Строительство газопровода низкого давления с. Мотмос ул. Советская к ж.д. №№ 56,56-А,59-А
	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	32,31					32,31	
4	Строительство газопровода низкого давления с. Мотмос ул. 1 Мая ж.д. № 10А и 
11 Б	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	146,67					146,67	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирова
ния	2013
 год	2014 
год	2015 
год	2016 
год	2017 
год	Всего	
5	Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ПРГ к ж.д. молодых специалистов улицы Локтя, Луговских, Фигуровской г. Выкса	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	3784,37					3784,37	
6
	Строительство газопровода низкого давления к жилым домам № 8,10,12,14,16,18,20 для детей сирот ул. Мирная с. Верхняя Верея	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	315,44					315,44	
7	Строительство газопровода высокого и низкого давления с. Нижняя Верея (2 очередь)	2013,
2014,
2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет

областной бюджет	164,43
	539,88
	
5318,34

10920,65	 	 	16943,30	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирова
ния	2013 
год	2014 
год	2015
 год	2016
 год	2017
 год	Всего	
8	Строительство газопровода низкого давления ул. Октябрьская д.48-А Мотмос	
 2013,
2014,
  2015
	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	27,0	
153,38
 			 	180,38	
9	Строительство газопровода низкого давления 
м-н Совхозный
 р.п. Шиморское	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	1344,92	
 	 	 	 	1344,92	
10	Строительство газопровода низкого давления к жилому дому № 41 ул. Зеленая с. Нижняя Верея	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	112,72	
 	 	 	 	112,72	
11	Строительство газопровода низкого давления с. Мотмос ул. Советская ж.д. № 61 и 61А	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	39,22					39,22	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014 
год	2015
 год	2016 
год	2017
 год	Всего	
12	Строительство газопровода низкого давления к жилому дому № 181 ул. Ленина с. Борковка	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	121,81	
 	 	 	 	121,81	
13	Строительство газопровода высокого давления к зданию № 100-А улица Ленина с. Борковка
	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	92,60	 	 			92,60	
14	Строительство газопровода низкого давления к жилым домам №№ 1,2,3,5 ул. Полевая р.п. Шиморское	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	61,57					61,57	
15	Строительство газопровода низкого давления к ж.д. № 2, 2А ул. Садовая р.п. Досчатое	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	35,56					35,56	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013
 год	2014 
год	2015 
год	2016 
год	2017 
год	Всего	
16	Строительство сетей газоснабжения к детскому саду на 240 мест в г. Выкса, м-н Западный зд. 68-А
	2013	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	22,99					22,99	
17	Строительство распределительный газопровод низкого давления к жилым домам №№ 2,4 ул. Лесная р.п. Виля

	2013-
  2014	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	20,27	406,67				426,94	
18	Строительство газопровода низкого давления к жилым домам №№ 12,14,23,24,26,27-А,32 м-н Западный 
г. Выкса	2013
2014
2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	
480,82
	431,21	9,4			921,43	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013
 год	2014 
год	2015 
год	2016 
год	2017 
год	Всего	
19	Строительство газопровода низкого давления к ж.д. № 11 ул. Садовая р.п. Виля
	2013,
2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	4,56		122,0			126,56	
20	

Строительство газопровода низкого давления к ж.д. молодых специалистов улицы: Локтя, Луговских, Фигуровской, Веретенова, Виноградова г. Выкса

	2013
	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет	66,44					66,44	
21	Строительство сетей газоснабжения к жилым домам для многодетных семей в западном жилом районе г. Выкса	2013
2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет

Областной бюджет	1,7

	

	6225,82

11283,6			17511,12	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013
 год	2014 
год	2015 
год	2016 
год	2017 
год	Всего	
22	Строительство газопровода низкого давления к жилым домам №№ 6-12 ул. Полевая р.п. Шиморское
	2014	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет		410,79				410,79	
23	Строительство газопровода низкого давления к жилым домам №№ 1,3,5,7,9,11,13,15 ул. Мирная с. Верхняя Верея
	2014	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет		254,12				254,12	
24	Строительство газопроводов-вводов низкого давления р.п. Виля (2 очередь)
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет		4238.71				4238,71	
25	Строительство газопровода низкого давления р.п. Виля (3 очередь)	
2014
2015
	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет

Областной бюджет		7500,01

32762,30	
11842,27 

		52104,58	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014
 год	2015 
год	2016 год	2017 
год	Всего	
26	Строительство газопроводов – вводов низкого давления к пропущенным жилым домам р.п. Виля
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет			1683,69			1683,69	
27	Строительство газопровода низкого давления к ж.д. № 1 ул. Сосновая с.Борковка
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет			400,0			400,0	
28	Строительство газопровода низкого давления к ж.д. № 121 ул. Октябрьская с. Мотмос
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет			179,8			179,8	
29	Строительство газопроводов-вводов низкого давления к ж.д. №№ 37, 39 ул. Локтя г. Выкса
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет		101,407	98,59			200,0	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014
 год	2015 
год	2016 год	2017 
год	Всего	
30	Строительство газопроводов-вводов низкого давления к ж.д. №№ 1, 3,5,7,9,11,13 ул. Фигуровской г. Выкса	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет			240,0			240,0	
31	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30,32, 34, 36,38,40,42,44,46 по ул. Локтя и к жилым домам №№ 27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49 по ул. Веретенова г. Выкса	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет			1600,0			1600,0	
32	Строительство газопровода высокого давления с. Нижняя Верея (3 очередь)	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет			400,0		 	400,0	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014
 год	2015 
год	2016 год	2017 
год	Всего	
33	Строительство газопровода высокого давления (с учетом м-на Западный) с. Борковка	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет			800,0	 	 	800,0	
34	
Строительство газопровода высокого давления р.п. Виля (3 очередь)
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет			 8620,0	 	 	8620,0	
35	
Строительство газопровода низкого давления с. Нижняя Верея (3 очередь)

	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет			13137,0	 	 	13137,0	
36	Строительство газопровода низкого давления ул. Лесная, Сосновая, Садовая, Рожновский проезд, Ленина, Новая Слобода с. Борковка
	2015
	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет			8625,39	 	 	8625,39	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014
 год	2015 
год	2016 год	2017 
год	Всего	
37	Строительство газопровода низкого давления пер. Песчаный р.п. Ближне-Песочное
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет			1150,0			1150	
38	Строительство газопровода высокого и низкого давления пер. Ленинградский, Семафорная г. Выкса
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет		  	3800,0	 	 	3800,0	
39	Строительство газопровода низкого давления ул. Нины Андреевой, Ленина, Горького, Спортивная, Садовая р.п. Шиморское
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	 		4184,9 	 	 	4184,9	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014
 год	2015 
год	2016 год	2017 
год	Всего	
40	Строительство газопровода низкого давления ул.Сиреневая, Осипенко с. Туртапка
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	 
		 1250,0 	 	 	1250,0	
41	Строительство газопровода низкого давления пер. Колхозный д. Змейка
	2015	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	

		 800,0 	 	 	800,0	
42	Строительство газопровода высокого давления Виля-Н.Дмитриевка

	2015-2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	 
 	 	3959,0	25340,0	 	29299,0	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014
 год	2015 
год	2016 год	2017 
год	Всего	
43	Строительство газопровода высокого давления (закольцовка) ул. Нины Андреевой в р-не д. № 13, ул. Калинина в р-не д. № 210-Б р.п. Шиморское
	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет		 		 60,0		60,0	
44	Строительство газопровода низкого давления ул. Проезжая Рогановская р.п. Виля
	
2016
	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет				1000,0		1000,0	
45	Строительство ЭЗУ ул. Корнилова г. Выкса
	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет				 310,0	 	310,0	
46	Строительство ЭЗУ ул. Стахановская

	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет				310,0  	 	310,0	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014
 год	2015 
год	2016 год	2017 
год	Всего	
47	Строительство ЭЗУ ул. Красные Зори д. 99г г. Выкса
	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет				490,0  	 	490,0	
48	Строительство ШРП ул. Краснофлотская г. Выкса
	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет				550,0  	 	550,0	
49	Строительство ЭЗУ на газопроводе высокого давления (1 очередь) с. Нижняя Верея	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	местный бюджет				310,0 	 	310,0	
50	Строительство газопровода высокого и низкого давления ул. Звездная д. Тамболес	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	 
		 	1500,0  	 	1500,0	
51	Строительство газопровода высокого давления к оздоровительному лагерю "Звездный"	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	 
 			
29299,0 	 	29299,0	
52	Строительство газопровода низкого давления с.п. Бакин	2016	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	 
 	 		8727,5	 	8727,5	
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выпол-нения	Исполнители 
мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.	
				Источник финансирования	2013 
год	2014
 год	2015 
год	2016 год	2017 
год	Всего	
53	Строительство газопровода низкого давления с.п. Пристанское
	2016
2017	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	 
 	 	 	764,0	3600,0	4364,0	
54	Строительство газопровода низкого давления с. Н.Дмитриевка	2016-2017	Администрация городского округа г. Выкса, 
подрядные организации	Местный бюджет	 
 	 	 	2639,0	16200	18839,0	
 	 	 	 	Итого	15575.
12	46798,48	96690,45	71299,5	19800	250163,56	

Приложение № 2 к Постановлению
от ____________________№ _____   

Список объектов по газификации городского округа города Выкса на 2013-2017 года
	
№	Краткое описание мероприятия	Протяженность, км.	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый объем инвестиций,	Ожидаемый эффект от реализации	
				тыс. руб.		
				источники финансирования по годам	всего	собственные средства организаций	другие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1.
	р.п.Виля  2 очередь высокого давления 	1,06	2013	Всего	5818.55		5818.55	 	
			 	
2013	5818.55				
						 			
2.	р.п.Виля  2 очередь низкого давления	13,7	2013	Всего	2881.17		2881,17	428 домов, 15 котельных, церковь, школа, детс/сад, больница, клуб, администрация, почта, 5 магазинов, почта, вет.лечебница, библиотека, дом быта и столовая.	
			 	
2013
	2881.17				

3.	р.п.Виля  3 очередь высокого давления 	2,5

 	2015	Всего	8620	 	 	
			 	2015	8620	 	8620		

4.	р.п.Виля  3 очередь низкого давления 	16,5
 
 	2014-2015	Всего	52104,58		469 домов, 5 котельных, 4 магазина и здание Выксунского лесхоза	
			 	2014	40262,31		52104,58		
				2015
	11842,27	 			
5	Строительство газопроводов-вводов низкого давления к пропущенным жилым домам р.п. Виляя
	0,644	2015	Всего	1683,69		1683,69		
				2015	1683,69		51 домовладения	
6.	с.Н.Верея  2 очередь высокого и низкого давления 

	5,4
 
 	2013-2015	Всего	16943,30	 	129 домов, котельная детс/сада	
			 	2013	164,43	 	16943,30		
				2014	539,88	 			
				2015	16238,99				
7.	с.Н.Верея 3 очередь высокого давления 	0,5
 	2015	Всего	400	 	 	
			 	2015		 	400		
Список объектов по газификации городского округа города Выкса на 2013-2017 года	
№	Краткое описание мероприятия	Протяженность, км.	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый объем инвестиций,	Ожидаемый эффект от реализации	
				тыс. руб.		
				источники финансирования по годам	всего	собственные средства организаций	другие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 											
8.	с.Н.Верея 3 очередь низкого давления 	5,5

 	2015	Всего	13137,0	 	13137,0	166 домов,администрация, дом культуры, школа, ФАП, 2 магазина, пож.депо, церковь	
			 	
2015	
13137,0	 		

		
		
9.	с.Борковка газопровод высокого давления с ПГБ	3,8	2015	Всего	800	 	улучшение газоснабжения с. Борковка, ФАП, дом творчества	
	с учетом с м-ном Западный	 
 	 	2015	800	 	  800		
						 			
10.	Газификация улиц: Лесная, Садовая, Сосновая, Рожновский проезд, Ленина, Новая Слобода с. Борковка	6,5
 
 	2015	Всего	8747,20	 	 	 	 	 	220 домов, дом творчества	
			 	2013	121,81	 	 	 	 	8747,20		
				2015
	8625,39
	 	 	 	 			
11.	Газификация жилых домов по  пер. Ленинградский,
Семафорная г. Выкса	1,5
 
 	2015	Всего	3800,0	 	 	 	 	 	41 дом	
			 	2015	3800,0	 	 	 	 	3800,0		

Список объектов по газификации городского округа города Выкса на 2013-2017 года	
№	Краткое описание мероприятия	Протяженность, км.	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый объем инвестиций,	Ожидаемый эффект от реализации	
				тыс. руб.		
				источники финансирования по годам	всего	собственные средства организаций	другие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.	Газификация жилых домов с. Мотмос ул. 1 Мая ж.д. 10А, 11Б	0,13
 
 	2013	Всего	146,67	 	 	 	 	 	2 дома	
			 	2013	146,67	 	 	 	 	146,67		
						 	 	 	 			
13.	Восстанолвление ЭЗУ  ул.Корнилова г.Выкса	 
 	2016	Всего	310,0	 	 	
			 	2016	310,0	 	310,0		
14.	Восстанолвление ЭЗУ  ул.Стахановская г.Выкса	 	2016	Всего	310,0		 	
			 	2016	310,0	 	310,0		
						 			
15.	Перенос ЭЗУ ул.Кр.Зори д.99г г.Выкса	 	2016	Всего	490,0		 	
			 	2016	490,0	 	490,0		
						 			
16.	Установка дополнительного ШРП ул.Краснофлотская г.Выкса	 	2016	Всего	550,0		 	
			 	2016	550,0	 	550,0		
						 			
17.	Строительство газопровода низкого давления пер. Песчаный р.п. Ближне- Песочное	0,6
 	2015	Всего	1150,0		4 дома	
			 	2015	1150,0	 	1150,0		

Список объектов по газификации городского округа город Выкса на 2013-2017 года	
	
№	Краткое описание мероприятия	Протяженность, км.	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый объем инвестиций,	Ожидаемый эффект от реализации	
				тыс. руб.		
				источники  финансирования по годам	всего	собственные средства организаций	другие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	Установка ЭЗУ в с.Н.Верея на газопроводе высокого давления 1 очереди	 	2016	Всего	310,0	 	 	
			 	2016	310,0	 	310,0		
						 			
19.	Газификация жилых домов по ул. Октябрьская, с. Мотмос	

0,17

 	2013-2015	Всего	180,38	 	 1 дом	
			 	2013	27,0	 	180,38		
				 2014	 153,38	 	 		
20.	Газификация жилых домов по ул. Сиреневая, Осипенко с. Туртапка	0,5
 
 	2015	Всего	1250,0	 	7 домов	
			 	2015	1250,0	 	1250,0		
				 	 	 	 		
21.	Газификация жилых домов по ул. Нины Андреевой, Ленина, Спортивная, Садовая, Горького, м-он Совхозный р.п. Шиморское

	1,48
 
 	2013, 2015	Всего	5529,82	 	13 домов - многоквартирные, МУП "Банно-прачечный комбинат"	
			 	2013	1344,92	 	5529,82		
				2015	4184,9	 			
22.	Газификация жилого дома № 41 ул. Зеленая  с.Нижняя Верея	0,06
 
 	2013	Всего	112,72	 	1 дом	
			 	
2013
 	112,72	 	112,72		
						 	 		
23.	Газификация жилых домов №№  61,61А ул. Советская  с. Мотмос	0,007
 	2013	Всего	39,22	 	2 дома	
			 	
2013
 	39,22	 	39,22		

Список объектов по газификации городского округа город Выкса на 2013-2017 года	
	
№	Краткое описание мероприятия	Протяженность, км.	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый объем инвестиций,	Ожидаемый эффект от реализации	
				тыс. руб.		
				источники  финансирования по годам	всего	собственные средства организаций	другие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.

	Газификация жилых домов №№ 56,56А,59А ул. Советская  с. Мотмос	0,18
 	2013	Всего	32,31	 	3 дома	
			 	
2013
 	32,31	 	32,31		
25.	Газификация жилых домов по пер. Колхозный д. Змейка	0,3	2015	Всего	800,0	 	5 домов	
			 	2015	800,0	 	800,0		
				 		 	 		
26.	Газификация жилых домов по ул. Проезжая, Рогановская р.п. Виля (Проволочное)	0,3	2016	Всего	1000,0	 	5 домов	
			 	2016	1000,0	 
 	1000,0 		
							 		
27.	Газификация жилых домов по ул. Звездная д. Тамболес	0,4	2016	Всего	1500	 	13 домов	
			 	2016
 	1500	 
 	1500,0 		
							 		
28. 	Газопровод высокого давления Виля -Н.Дмитриевка	12,57	2015-2016	Всего	29299,0	 	 	
			 	2015	3959,0	 	29299,0		
				2016	25340,0	 			
					 	 	 	 	 		
29.	Газопровод низкого давления Н.Дмитриевка	8,0	2016-2017	Всего	18839,0	 	194 дома в т.ч. 14 многоквартирные, 1 котельная, 4 магазина, дом творчества, школа, детский сад, амбулатория, здание лесхоза, церковь	
			 	2016	2639,0	 	18839,0		
				2017	16200,0	 			

Список объектов по газификации городского округа город Выкса на 2013-2017 года	
	
№	Краткое описание мероприятия	Протяженность, км.	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый объем инвестиций,	Ожидаемый эффект от реализации	
				тыс. руб.		
				источники  финансирования по годам	всего	собственные средства организаций	другие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30.	Газопровод высокого давления к оздоровительному лагерю "Звездный"	12,0	2016	Всего	29299,0	 	 	 	 	 	 	
			 	2016	29299.0	 	29299,0		

31.
 	Газопровод низкого давления с.п. Бакин	 
 
3,5
 	2016	Всего	8727,5	 	 	 	 	 	59 домов, зона отдыха "Красный Бакен", 1 магазин	
			 	
2016
	8727,5	 	 	 	 	8727,5		

 32.	Газопровод низкого давления с.п. Пристанское	 
 
1,7

	2016-2017	Всего	4364,0	 	 	 	 	 	45 домов, 2 зоны отдыха	
			 	2016	764,0	 	 	 	 	4364,0		
				2017	3600,0	 	 	 	 			
 33.	Газопровод низкого давления к жилым домам №№ 8,10,12,14,16,18,20 для детей сирот ул. Мирная с. Верхняя Верея	 0,2	2013	Всего	315,44	 	 	 	 	315,44	7 домов	
34.	Газопровод высокого и низкого давления с установкой ПРГ к жилым домам для молодых специалистов ул. Луговских, Локтя, Фигуровской г. Выкса	 
 
0.76

	2013	Всего	3784,37	 	 	 	 	3784,37	22 дома	
				2013	3784,37							
35.	Газопровод высокого давления к зданию № 100-А улица Ленина с. Борковка	 
 
0,57	2013	Всего	92,60	 	 	 	 	92,60	1 здание	
				2013	92,60							

Список объектов по газификации городского округа город Выкса на 2013-2017 года	
	
№	Краткое описание мероприятия	Протяженность, км.	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый объем инвестиций,	Ожидаемый эффект от реализации	
				тыс. руб.		
				источники  финансирования по годам	всего	собственные средства организаций	другие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36.	Газопровод высокого давления (закольцовка) ул. Нины Андреевой в р-не д. № 13, ул. Калинина в р-не д. № 210-Б р.п. Шиморское	 
 0,8
	2016	Всего	60,0	 	 	 	 	60,0		
				2016	60,0							
37.	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам №№ 2,4 ул. Лесная р.п. Виля	 
 0,46
	2013
2014	Всего	426,94	 	 	 	 	426,94	2 дома	
				2013	20,27							
				2014	406,67							
38.	Газопровод низкого давления к жилым домам №№ 1,2,3,5 ул. Полевая  р.п. Шиморское	 
 0,26
	2013	Всего	61,57	 	 	 	 	61,57	4 дома	
				2013	61,57							
39.	Газопровод низкого давления к жилым домам №№ 12,14,23,24,26,27-А,32 м-н Западный г. Выкса	 
 0,54
	2013-2015	Всего	921,43	 	 	 	 	921,43	7 домов	
				2013	480,82							
				2014	431.21							
				2015	9,4							
40.	Газопровод низкого давления к жилым домам №№ 2,2А ул. Садовая р.п. Досчатое	 
 0,1
	2013	Всего	35,56	 	 	 	 	35,56	2 дома	
				2013	35,56							
41.	Газопровод низкого давления к жилому дому № 121 ул. Октябрьская с. Мотмос	 
 0,05
	2013, 2014	Всего	179,8	 	 	 	 	179,8	1 дом	
				2013	29,8							
				2014	150,0							
42.	Газопроводы –вводы низкого давления р.п. Виля (2 очередь)	 
 5.0
	2014	Всего	4238,71	 	 	 	 	4238,71		
				2014	4238,71							

Список объектов по газификации городского округа город Выкса на 2013-2017 года

	
№	Краткое описание мероприятия	Протяженность, км.	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый объем инвестиций,	Ожидаемый эффект от реализации	
				тыс. руб.		
				источники  финансирования по годам	всего	собственные средства организаций	другие источники	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43.	Газопроводы низкого давления к жилым домам №№ 6-12 ул. Полевая р.п. Шиморское
	 
 0,44	2014	Всего	410,79	 	 	 	 	410,79	6 домовладений	
				
2014
	410,79							
44.	Газопровод низкого давления к ж.д. молодых специалистов улицы: Локтя, Луговских, Фигуровской, Веретенова, Виноградова г. Выкс
	1,685	2013	Всего	66,44					66,44	34 домовладения	
				2013	66,44							
45.	Сети газоснабжения к детскому саду на 240 мест в г. Выкса, м-н Западный зд. 68-А	1,5	2013	Всего	22,99					22,99	1 здание	
				2013	22,99							
46.	Газопровод низкого давления к ж.д. № 11 ул. Садовая р.п. Виля
	0,85	2013
2015	Всего	126,56					126,56	1 жилой дом	
				2013	4,56							
				2015	122,0							
47.	Сети газоснабжения к жилым домам для многодетных семей в западном жилом районе г. Выкса	8.6	2013
2015	Всего	17511,12					17511,12	208 домовладения	
				2013	1,7							
				2015	17509,42							
48.	Газопровод низкого давления к ж.д. № 1 ул. Сосновая с. Борковка	0,16	2015	Всего	400,0					400,0	 1 жилой дом	
				2015	400,0							
49.	Газопровод низкого давления к ж.д. 121 ул. Октябрьская с. Мотмос	0,05	2015	Всего	179,80					179,8	1 жилой дом	
				2015	179,80							
50.	Газопроводы-вводы низкого давления к ж.д. № 37, 39 ул. Локтя г. Выкса	 
0,38 
	2014-2015	Всего	200,0	 	 	 	 	200,0	2 домовладения	
				
2014	101,407							
				2015	98,59							
51.	Газопроводы-вводы низкого давления к ж.д. №№ 1,3,5,7,9,11,13 ул. Фигуровской г. Выкса	0,042	2015	Всего	240,0					240,0	7 домовладений	
				
2015
	240,0							
52.	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам №№ 20-46 ул. Локтя и к жилым домам №№ 27-49 ул. Веретенова г. Выкса	0,8	2015	Всего	1600,0					1600,0	26 домовладений	
				
2015
	1600,0							
53.	Газопроводы низкого давления к жилым домам №№ 1,3,5,7,9,11,13,15 ул. Мирная с. Верхняя Верея	 
0,38 
	2014	Всего	254,12	 	 	 	 	254,12	8 домовладений	
				
2014
	254,12							
 	Всего      по программе
 	123,044
	 
 	2013	15575,12	ВСЕГО:  250163,55 тыс. руб.                                                                                       В том числе: Местный бюджет – 193422,40  тыс. руб;      
                                       Областной бюджет – 56741,15 тыс.руб.                                                               	
				2014	46798,48		
				2015	96690,45		
				2016	71299,5		
				2017	19800